[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	새마을경제과	②담당자 (연락처)	전산7급 임종엽 행정5급(새마을경제과장) 강종구
③정책사업명	봉화상설시장 전통시장 기반조성사업
④선정기준	총사업비 10억이상 건설공사	⑤사업기간	2011.3 ～ 2014.12
⑥주요내용	○ 사업목적 - 지역 축제 및 관광자원과 연계한 전통시장 활성화 사업 추진 중 - 문화관광형 특화시장으로 전통시장을 찾는 도시 관광객 및 고객들을 위한 문화․휴게 공간 등의 편의시설 설치 필요 ○ 사업개요 - 위치 : 봉화읍 내성리 394-1일원(봉화상설시장 지내) - 조성면적 : 41필지 5,503㎡ - 총사업비 : 5,000백만원(국비 3,000 지방비 2,000) ('11년 2,170백만원, '12년 700백만원, '13년 2,130백만원) - 사업내용 : 고객문화쉼터, 먹거리 및 난전거리 조성 등 ○ 추진상황 - 사전절차이행 : 중기재정계획반영, 투융자심사완료 : 2010. 10. 20 - 부지매입을 위한 공유재산변경(안) 승인 : 2011. 11. 14 - 부지매입 보상계획 및 열람공고 : 2011. 12. 09 - 전통시장 시설현대회사업 변경사업변경 승인통보 : 2012. 02. 14 - 부지매입 보상 : 2012. 03월 ~ - 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2012. 08. 22 ~ 2013. 02. 28 - 군계획시설사업 실시계획 인가 : 2013. 9. 23 - 건축물헐기공사, 유해물질 해체 및 처리, 폐기물처리 착공 (2013. 9. 17 ~ 2014. 9) ※ 부지보상 협의 추진중(보상액 2,645,756,210원중 2,264,019,910원 보상)

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	새마을경제과	②담당자 (연락처)	농업7급 황성욱 행정5급(새마을경제과장) 강종구
③정책사업명	봉화유곡농공단지 오폐수처리장설치사업
④선정기준	총사업비 10억이상 건설공사	⑤사업기간	2012. 5 ~ 2015. 3
⑥주요내용	○ 사업목적 - 기업유치를 통한 고용창출 및 지역경제의 활성화를 위한 신규 유곡농공단지에 친환경적 폐수종말처리사업 추진 ○ 사업개요 - 위 치 : 봉화읍 유곡리(봉화유곡농공단지) - 조성면적 : 4,320㎡ - 총사업비 : 5,034백만원(국비 5,034) ('12년 98백만원, '13년 2,710백만원, '13년 2,226백만원) ○ 추진현황 - 시공업체 : 동우건설 외3개사[(주)엔큐, ㈜삼보아이티, 명신전기(주)] - 계약금액 : 도급액 2,434,034천원 관급액 2,334,634천원 ○ 추진계획 - 2014.05 : 1차 공사 완료 및 2차 공사 발주 - 2014.12 : 1단계 공사 완료 및 시운전 - 2015.03 : 1단계 공사 준공