공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1-1-1			외국인 근로자 농촌일자리 중개센터 건립
농촌활력과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	■국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	56억원				추진상황 (이행률)	설계공모 시행 등 (70%)
추진부서	농촌활력과 농촌인력팀 (담당자 김재홍 ☎ 6886)				협조부서	농촌개발팀
공약목표	외국인 계절근로자 농촌일자리 중개센터 건립
사업개요	사업위치			봉화군 봉성면 봉성리 380-2 일원
	사업기간			2022. 7. ~ 2026. 6.
	사 업 량			1,054㎡정도
	사업내용			농업 근로자 공동숙식을 위한 기숙사 리모델링
추진계획	~‘22년			• 공공형계절근로사업공모신청 (외국인계절근로자농촌일자리중개센터운영비지원사업)
	‘23년			• 사업예정부지 확정, 중기지방재정계획 및 투자심사 완료 • 공공건축기획용역, 건축물 정밀안전진단 용역 시행
	‘24년			• 사업부지 매입 • 설계공모, 실시설계
	‘25년			• 건축공사 착공 및 준공 • 농업 계절근로자 농촌 일자리 중개센터 운영
	‘26년~			• 농업 계절근로자 농촌 일자리 중개센터 운영
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고	농업 근로자 기숙사지원사업 공모선정으로 국 비확보(전국2개소 선정)

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
추진율	목 표(A)	100%	-	20%	70%	100%	-
	실 적(B)	70%	-	20%	70%	70%	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		70%	0%	100%	100%	70%	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’23. 03. : 기본구상 및 타당성조사용역, 투·융자심사 등 사전검토 이행

◦ ’23. 11. : 공공건축 기획용역 및 건축물 정밀안전진단 용역 시행

◦ ’24. 01. : 사업부지 매입 완료(건축물 1,144㎡, 부지 48,270㎡)

◦ ’24. 04. : 공공건축심의 완료

◦ ’24. 07. : 공공건축 설계공모 및 실시설계용역

◦ ’25. 02. : 리모델링 건축공사 착공

◦ ’25. 09. : 준공 및 농촌일자리중개센터 운영

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	240	-	-	240	-	240	-	-	240	-
2024년	3,240	120	36	984	2,100	3,240	120	36	984	2,100
2025년	2,160	1,080	324	756	0	-	-	-	-	-
2026년~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	5,640	1,200	360	1,980	2,100	3,480	120	36	1,224	2,100

□ 재원 조달방안

◦ 국비 공모사업 신청을 통한 사업비 확보