공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1-1-4			서벽지역 다목적 농촌용수개발사업
농촌활력과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 □군 ■기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업,비	49,320백만원				추진상황 (이행률)	추진중(30%)
추진부서	농촌활력과 농업기반조성팀 (담당자 문희준 ☎ 6847)				협조부서	한국농어촌공사 영주봉화지사 (담당자 이경근 639-5045)
공약목표	농어촌 용수를 개발하여 복합 영농 기반을 구축하고 농어촌의 환경개선 도모
사업개요	사업위치			봉화군 춘양면 서벽리 820-1(금당골)
	사업기간			2023. ~ 2027.
	사 업 량			저수지 1개소, 이설도로 3조 L=2.100m, 진입도로 1조 L=840m
	사업내용			저수지 1개소(총 저수량 1,282천㎥), 제방 H=49.1m, L=184.0m, 이설도로 3조 L=2.100m, 진입도로 1조 L=840m, 용수간선 2조 L=21.9km
추진계획	‘22년 05월			• 세부설계 착수
	‘22년 10월			• 재해영향평가 및 환경영향평가
	‘24년 01월			• 편입용지보상
	‘24년 09월			• 공사 착공
	‘27년			• 공사 준공(예정)
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
추진율	목 표(A)	60%	10%	40%	60%	80%	100%
	실 적(B)	30%	10%	10%	30%	10%	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		50%	100%	25%	50%	13%	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 03. : 2023년 신규착수지구 선정

◦ ’22. 05. : 세부설계 착수

◦ ’23. 04. : 재해영향평가 및 환경영향평가

◦ ’24. 01.  : 편입용지보상

◦ ’24. 09. ~ ’27. 12.  : 공사 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	300	300	-	-	-	300	300	-	-	-
2023년	1,500	1,500	-	-	-	500	500	-	-	-
2024년	7,500	7,500	-	-	-	4,000	4,000	-	-	-
2025년	7,500	7,500	-	-	-	5,906	5,906	-	-	-
2026년	7,500	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	25,020	25,020	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	49,320	49,320	0	0	0	10,706	10,706	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 국비 100%