공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1 - 3 - 1			봉화형 스마트팜 기반 조성사업
농업기술과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	235.9억원				추진상황 (이행률)	추진중(60%)
추진부서	농업기술과 스마트청년농업팀 (담당자 권정주 ☎ 6667)				협조부서
공약목표	봉화형 스마트팜 기반 조성
사업개요	사업위치			봉화군 봉성면 창평리 312-1번지 일원
	사업기간			2022. ~ 2025.
	사 업 량			3.5ha(시설) 5.3ha(부지)
	사업내용			봉화 임대형 스마트팜단지 조성
추진계획	~‘22년			• 임대형 스마트팜단지 조성사업 공모 신청
	‘23년			• 임대형 스마트팜단지 조성사업 공모 선정 • 토지매입 및 기본계획 용역 시행
	‘24년			• 실시설계 용역 및 농업생산기반정비 시행계획 수립 • 봉화 임대형 스마트팜 단지 공사 착공
	‘25년			• 봉화 임대형 스마트팜 단지 준공 및 임대계약 체결
	‘26년~			• 봉화 임대형 스마트팜 단지 운영 등
문 제 점 (주민의견)	-임대형 스마트팜(2세대형)의 최적 운영을 위한 우수한 농업인 육성‧선발
개선방안	-맞춤형 스마트팜 전문교육을 통하여 봉화 임대형 스마트팜 입주자격 부여
비 고	봉화 임대형 스마트팜 단지 조성 3.5ha

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
임대형 스마트팜단지 조성 (3.5ha)	목 표(A)	3.5ha	-	-	-	3.5ha	-
	실 적(B)	-	-	-	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		0%	0%	-		100%	-

□ 추진경과 및 계획

◦ 2023. 02. : 임대형 스마트팜 조성사업 대상자 선정 (도→군)

◦ 2023. 04. : 임대형 스마트팜 단지 사업부지 토지매입 계획(안) 수립

◦ 2023. 06. : 편입대상 토지 및 물건 감정평가 실시

◦ 2023. 09. : 토지보상금 예산 수립(2회 추경) 및 보상완료

◦ 2023. 10. : 지방재정투자심사 심의(경상북도)

◦ 2023. 11. : 기본계획 수립 용역 완료

◦ 2023. 12. : 문화재 지표조사 용역 완료

◦ 2024. 01. : 임대형 스마트팜 단지 조성사업 실시설계 용역 시행

◦ 2024. 09. : 농업생산 기반정비 시행계획 수립 및 승인(경상북도)

◦ 2024. 10. : 시공사 선정 및 임대형 스마트팜 단지 조성사업 착공

◦ 2025. 09. : 스마트팜 단지 준공 및 임대계약

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	4,100	-	1,800	2,300	-	4,100	-	1,800	2,300	-
2024년	7,500	1,000	1,000	3,500	2,000	7,500	1,000	1,000	3,500	2,000
2025년	11,990	-	-	9,990	2,000	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	23,590	1,000	2,800	15,790	4,000	19,650	1,000	2,800	5,800	2,000

□ 재원 조달방안

◦ 도비재원 증액, 국비사업 연계 등 국도비 예산확보 지속 노력