공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

1 - 3 - 2			스마트농업 실습단지 조성사업
농업기술과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	32.5억원				추진상황 (이행률)	추진중(90%)
추진부서	농업기술과 스마트청년농업팀 (담당자 권정주 ☎ 6667)				협조부서
공약목표	• 특화작목 및 신소득 작목(딸기, 토마토 등)의 스마트팜 적용 시범재배 • 작목별 스마트팜, 빅데이터, ICT장비 도입 등 우리군 여건에 맞는 스마트농업의 농가 현장확산 기반마련
사업개요	사업위치			봉화군 봉성면 금봉리 781-1 외 2필지
	사업기간			2022. ~ 2026.
	사 업 량			0.4ha
	사업내용			• 스마트농업 테스트베드, 청년 경영실습 임대농장 조성
추진계획	~‘22년			• 스마트농업 실습단지 예산확보 사업 계획 수립
	‘23년			• 한국농어촌공사 사업 위ˑ수탁 협약 체결 • 세부설계 용역 및 공사착공
	‘24년			• 공사준공 및 스마트농업 기반조성(시스템, 기자재 등)
	‘25년			• 스마트농업 테스트베드, 청년경영실습 임대농장 시범운영
	‘26년~			• 스마트농업 테스트베드, 청년경영실습 임대농장 시범운영
문 제 점 (주민의견)	우리지역에 적합한 스마트팜 모델 구축과 변화하는 농업생태계에 대안을 제시
개선방안	스마트팜 테스트베드와 경영실습 임대농장을 스마트팜 교육장으로 활용하여 임대형 스마트팜 단지의 사업 성공을 견인
비 고	스마트온실 테스트베드 0.2ha, 청년 경영실습 임대농장 0.2ha

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
스마트농업 실습단지조성 (0.4ha)	목 표(A)	0.4ha	-	-	-	0.4ha	-
	실 적(B)	-	-	-	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		0%	0%	-	-	100%	-

□ 추진경과 및 계획

◦ 2022. 11. : 청년창업 경영실습 임대농장 선정(농림부)

◦ 2023. 03. : 사업추진 계획(안) 수립

◦ 2023. 04. : 한국농어촌공사 사업 위·수탁 협약 체결

◦ 2023. 05. : 세부설계 용역 입찰 공고

◦ 2023. 06. : 지질조사 및 경계측량 실시

◦ 2023. 07. : 착수보고회 개최 및 벤치마킹(기본안 확정)

◦ 2023. 09. : 세부설계 용역 완료

◦ 2023. 11. : 시공사 선정 및 착공

◦ 2025. 01. : 준공검사 및 공사완료

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	200	-	-	-	200	200	-	-	-	200
2023년	3,050	300	39	1,561	1,150	3,050	300	39	1,561	1,150
2024년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	3,250	300	39	1,561	1,350	3,250	300	39	1,561	1,350

□ 재원 조달방안

◦ 농촌진흥청 농촌지도기반조성사업 등 관계기관 협의를 통하여 조성 후 교육연구 사업비 확보에 노력