공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

5 - 1 - 1			치매전담형 노인요양시설 확충
주민복지과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	103.31억원				추진상황 (이행률)	추진 중(90%)
추진부서	주민복지과 노인복지팀 (담당자 우중원 ☎ 6104)				협조부서	-
공약목표	20년이상 노후된 봉화요양원의 증·개축을 통한 치매전담형 시설 전환
사업개요	사업위치			봉화군 법전면 갈방길 33-15
	사업기간			2019. 4. ~ 2025. 3.
	사 업 량			3개동(지상1층 2개동, 지상2층 1개동) 증개축
	사업내용			치매 전담형 전환을 위한 증·개축
추진계획	~‘22년			(‘20년 12월) A동[좌측동] 준공 (’22년 07월) B동[본관동] 철거 및 공사 착수
	‘23년			(‘23년 09월) B동[본관동] 준공 (’23년 11월) C동[우측동] 철거 및 공사 착수
	‘24년 ~			(‘24년 12월) C동[우측동] 준공 (’25년 03월) 3개동 본인증 후 운영 실시
문 제 점 (주민의견)	주차장 및 진입로 부지 등 조성 필요
개선방안	공유재산 취득 후 시행에 대한 예산 편성 등 절차 검토
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
노인요양시설 공정률(%)	목 표(A)	100	30	70	100	-	-
	실 적(B)	90	25	70	90	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		90%	85%	100%	90%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’20. 12. : [A동] 준공 완료

◦ ’21. 06. : [B동] 건축물 철거 완료

◦ ’21. 10. : [B동] 건축물 실시설계 공모

◦ ’22. 06. : [C동] 철거 및 기본실시설계 용역 중

◦ ’22. 07. : [B동] 공사 착공

◦ ’23. 09. : [B동] 공사 완공 및 운영

◦ ’23. 11.  : [C동] 공사 착공

◦ ’24. 12. : [C동] 공사 완공

◦ ’25. 03.  : [C동] 사용승인 후 본격 운영 실시

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전(A동)	1,370	432	108	830	-	1,370	432	108	830	-
2022년(B동)	4,900	3,084	396	1420	-	1,456	758	152	546	-
2023년(B동)						3,444	2,326	244	874
2023년(C동)	4,061	1,109	194	2758	-	1,535	537	40	958	-
2024년(C동)						2,526	572	154	1,800	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	10,331	4,625	698	5,008	-	10,331	4,625	698	5,008	-

□ 재원 조달방안

◦ 노인요양시설 기능보강비 국도비 보조사업 예산 사용