공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

5 - 2 - 3			리틀포레스트 봉뜨락 조성사업
문화관광과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	40억원				추진상황 (이행률)	추진 중(60%)
추진부서	문화관광과 관광개발팀 (담당자 임기석 ☎ 6354)				협조부서
공약목표	부모와 아이들이 함께하는 가족단위 놀이시설 조성
사업개요	사업위치			봉화읍 석평리 1214-22번지 일원(구 승마교육장)
	사업기간			2022. ~ 2025.
	사 업 량			A=6,223㎡/건축 리모델링 2동
	사업내용			지역 및 인근 시군 아이들을 위한 실내외 놀이터 조성
추진계획	‘22년			• 기본 구상 및 타당성 검토
	‘23년			• 예산 확보 및 기본 설계
	‘24년			• 실시설계 및 사업 착공
	‘25년			• 사업 준공 및 운영(위탁)
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업 추진실적	목 표(A)	25%	5%	15%	25%	100%	-
	실 적(B)	25%	5%	15%	25%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	100%	-	-

※ 실적관련 : 24년 11월 공사착공

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 05. ~ 12. : ‘23년 도 균특 전환사업 예산 요구 및 확보

◦ ’23. 01. ~ 12. : 실시설계 용역 완료

◦ ’24. 01. ~ 06:  기술심의 및 공법선정 완료

◦ ’24. 07. ~ 10:  계약원가심사 등 사전행정절차 완료

◦ ’24. 11. ~ ’25. 08. : 사업착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	1,000	-	400	600	-	1,000	-	400	600	-
2024년	1,600	-	600	1,000	-	3,000	-	1,100	1,900	-
2025년	1,400	-	500	900	-	-	-	-	-	-
2026년~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	4,000	0	1,500	2,500	0	4,000	0	1,500	2,500	0

□ 재원 조달방안

◦경상북도 균특 전환사업 예산 확보(23년 1,000백만원, 24년 4,000백만원)