공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3 - 1 - 2			분천 산타마을 테마파크 조성 (겨울왕국 분천 산타마을 관광명소화 사업)
문화관광과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	15,000백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(90%)
추진부서	문화관광과 관광개발팀 (담당자 권흥기, 권혁민 ☎ 6353)				협조부서
공약목표	경북권 최고 가족단위 체험 관광지 조성
사업개요	사업위치			봉화군 소천면 분천리 산타마을 일원
	사업기간			2020. ~ 2025.
	사 업 량			A=26,103㎡
	사업내용			미니기차, 사계절 썰매장, 산타체험관, 전망대 등
추진계획	~‘22년			• 건설 공사 발주(토목, 조경, 건축 등)
	‘23년			• 물품구입 계약(미니기차, 전망대 등) 및 공사 진행
	‘24년			• 조경공사 등 진행
	‘25년			• 총괄사업 준공
	‘26년~
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업 추진실적	목 표(A)	90%	30%	60%	90%	100%	-
	실 적(B)	85%	30%	35%	85%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		94%	100%	58%	94%	-	-

※ 실적관련 : 건설공사 발주 및 물품구입 (85%)

□ 추진경과 및 계획

◦ ’20. 10. : 기본계획 수립용역 완료

◦ ’22. 06. : 사업대상부지 확정(26,103㎡)

◦ ’22. 10.  : 문화재 표본조사 완료

◦ ’22. 12. : 인허가 및 기본·실시설계 용역 완료

건설공사 발주(건축, 조경, 토목 등)

◦ ’24. 02. ~ 12. : 미니기차 등 물품 구입 완료(협상에 의한 계약)

◦ ’25. 04. : 총괄 사업 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	5,000	-	3,250	1,750	-	5,000	-	3,250	1,750	-
2022년	1,000	-	650	350	-	1,000	-	650	350	-
2023년	5,000	-	2,800	2,200	-	5,000	-	2,800	2,200	-
2024년	4,000	-	2,300	1,700	-	4,000	-	2,300	1,700	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	15,000	-	9,000	6,000	-	15,000	-	9,000	6,000	-

□ 재원 조달방안

◦ 23년 사업비 확보(도2,800 군2,200), 24년 사업비확보 (도2,300 군1,700)