공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3 -1 - 3			약수관광지 활성화 사업
문화관광과
사업구분	■신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	1,500백만원				추진상황 (이행률)	완료(100%)
추진부서	문화관광과 관광개발팀 (담당자 권혁민 ☎ 6352)				협조부서
공약목표	지정 관광지 활성화 인프라 확충
사업개요	사업위치			오전 및 다덕 약수관광지 주변
	사업기간			2022. ~ 2024.
	사 업 량			주차장 및 쉼터 조성
	사업내용			다덕약수관광지 주변 주차장 및 쉼터 조성
추진계획	~‘22년			• 주차장 및 쉼터 조성공사 발주(다덕)
	‘23년			• 주차장 및 쉼터 조성공사 완공(1차)
	‘24년			• 주차장 및 쉼터 조성 준공(2차, 총괄) • 진입도로 정비공사 준공
	‘25년
	‘26년~
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업 추진실적	목 표(A)	100%	30%	60%	100%	-	-
	실 적(B)	100%	30%	65%	100%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	108%	100%	-	-

※ 실적관련 : 다덕약수관광지 주변 주차장 및 쉼터 조성 공사 준공

진입도로 공사 준공

□ 추진경과 및 계획

(다덕약수관광지 주변 주차장 및 쉼터 조성)

◦ ’22. 09. : 실시설계 용역 완료

◦ ’22. 12. : 사업 발주 및 착공

◦ ’23. 01. ~ 08. : 1차사업 준공

◦ ’23. 09. ~ ’24. 09. : 2차, 총괄사업 준공

◦ ’24. 10. ~ ’24. 12. : 진입도로공사 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	500	-	250	250	-	500	-	250	250	-
2023년	500	-	250	250	-	500	-	250	250	-
2024년	200	-	100	100	-	-	-	-	-	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	1,200	-	600	600	-	1,000	-	500	500	-

□ 재원 조달방안

◦ 해당없음