공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3 - 1 - 4			산수유마을 환경정비 및 봉성 연(蓮)생태공원 조성사업
문화관광과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	■단기 □중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	2,000백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(30%)
추진부서	문화관광과 관광개발팀 (담당자 권흥기 ☎ 6353)				협조부서
공약목표	산수유마을 방문 관광객 및 연생태 공원 확충
사업개요	사업위치			봉성면 산수유마을 및 봉서루 일원
	사업기간			2022. ~ 2025.
	사 업 량			쉼터, 산책로 및 연생태공원 조성
	사업내용			관광객 편의시설 확충 및 연생태공원 조성
추진계획	~‘22년			• 사업구상 및 대상지 물색
	‘23년			• 대상지 및 사업계획 확정(쉼터, 산책로, 주차장 등) • 기본구상 및 타당성조사 용역시행
	‘24년			• 실시설계용역 발주
	‘25년			• 공유재산심의회 및 토지매입 시행 • 실시설계용역 완료, 사업 착공 및 준공
	‘26년~
문 제 점 (주민의견)	사업 추진을 위한 예산확보 필요
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업 추진실적	목 표(A)	60%	10%	30%	60%	100%	-
	실 적(B)	25%	10%	10%	25%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		41%	100%	33%	41%	-	-

※ 실적관련 : 실시설계 용역 중(25%)

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 08. ~ 12. : 사업구상 및 대상지 물색

◦ ’23. 01. ~ 08. : 대상지 및 사업계획 확정(쉼터, 산책로, 주차장 등)

◦ ’23. 09. : 기본구상 및 타당성조사 용역 시행

◦ ’24. 11.  ~  ’25. 05. : 실시설계용역 시행

◦ ’25. 01. ~ 12. : 공유재산심의회 및 토지매입 시행, 사업착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-
2025년	1,900	-	-	1,900	-	1,900	-	-	1,900	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	2,000	-	-	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-

□ 재원 조달방안

◦ 2025년 본예산 편성(전액 군비)