공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3 - 1 - 5			금봉저수지 순환산책로 조성사업
문화관광과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	3,000백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(30%)
추진부서	문화관광과 관광자원육성팀 (담당자 반지환 ☎ 6644)				협조부서
공약목표	친환경 힐링 관광인프라 확충
사업개요	사업위치			봉성면 금봉리 금봉저수지 일원
	사업기간			2024. ~ 2026.
	사 업 량			산책로 L=910m, 전망쉼터 등
	사업내용			금봉저수지 일원 산책로 등 조성
추진계획	‘23년			• 지방재정 투자심사(자체) 완료
	‘24년			• 한국농어촌공사 사전 업무협의 • 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
	‘25년			• 도 지특전환사업 예산 신청 및 확보 • 실시설계 완료, 한국농어촌공사 업무협의 완료
	‘26년~			• 사업 착공 및 준공
문 제 점 (주민의견)	사업 추진을 위한 예산 확보 필요
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업 추진실적	목 표(A)	25%	-	15%	25%	40%	100%
	실 적(B)	15%	-	5%	15%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		60%	-	33%	60%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ `23. 05. : 지방재정 투자심사 의뢰(자체)

◦ `24. 07. : 담당팀 변경(관광개발팀 → 관광자원육성팀)

◦ `24. 08. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수

◦ `24. 09. ~ 10. : 한국농어촌공사 사전 업무협의

◦ `25. 01. ~ 12. : 기본·실시설계 및 한국농어촌공사 업무협의 완료

◦ `26. 03. ~ 10. : 사업 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025년	1,500	-	750	750	-	-	-	-	-	-
2026년	1,500	-	750	750	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-

□ 재원 조달방안

◦ 경북도 지특전환사업 신청 및 확보(2025~2026)