공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3 - 1 - 6			구국도(노루재) 관광자원화사업
문화관광과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	5,700백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(30%)
추진부서	문화관광과 관광자원육성팀 (담당자 이동욱 ☎ 6642)				협조부서
공약목표	새로운 테마 관광체험 콘텐츠 조성 및 체류형 기반 확충
사업개요	사업위치			소천면 현동리 일원
	사업기간			2023. ~ 2026.
	사 업 량			체험형 놀이시설 조성
	사업내용			주민제안 관광체험시설 조성
추진계획	~‘22년			• 기본구상 및 타당성조사 용역 착수
	‘23년			• 경북도 지특전환사업 예산 신청 및 확보 • 기본구상 및 타당성조사 용역 완료 • 봉화군 자체 투자심사 완료
	‘24년			• 기본 및 실시설계 용역 착수 • 사업계획 변경 관련 주민공청회 실시
	‘25년			• 인허가 등 사전 행정절차 및 실시설계 완료
	‘26년~			• 사업 착공 및 준공
문 제 점 (주민의견)	지형·지장물 및 입지의 한계로 사업 변경 필요
개선방안	주민추진위원회 제안사업 검토를 통한 사업계획 변경
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업 추진실적	목 표(A)	30%	5%	15%	30%	50%	100%
	실 적(B)	20%	5%	15%	20%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		66%	100%	100%	66%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’23. 05. : 기본구상 및 타당성조사 용역, 투자심사(자체) 완료

◦ ’23. 09. : 사업계획 변경(루지 → 스카이라이드) 추진

◦ ’24. 01. : 도 지특전환사업 계획 변경 승인 완료

◦ ’24. 02. : 기본 및 실시설계 용역 착수

◦ ’24. 06. ~ ’24. 12. : 주민설명회 등 주민의견 수렴

◦ ’25. 12. : 인허가 등 사전 행정절차 및 실시설계 완료

◦ ’26. 03. ~ ’26. 12. : 사업 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	1,000	-	500	500	-	1,000	-	500	500	-
2025년	1,000	-	500	500	-	-	-	-	-	-
2026년	3,700	-	750	2,950	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	5,700	-	1,750	3,950	-	1,000	-	500	500	-

□ 재원 조달방안

◦ 경북도 지특전환사업 선정 완료(2024~2026)