공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3 - 2 - 1			노인체육시설 확충
체육시설사업소
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	4억원				추진상황 (이행률)	추진 중(60%)
추진부서	체육시설사업소 체육진흥팀 (담당자 전혜정 ☎ 6977)				협조부서	기획감사실
공약목표	게이트볼장 2개소 조성을 통한 노인 체육활동 여건 개선
사업개요	사업위치			봉화군 관내 일원
	사업기간			2023. 01. ~ 2025. 12.
	사 업 량			게이트볼장 조성(2개소)
	사업내용			인조잔디포장(500㎡×2개소), 메쉬휀스 설치 등.
추진계획	~‘22년			• 게이트볼장 읍·면 수요조사 실시
	‘23년			• 상운면 게이트볼장 공사 발주 및 완료
	‘25년			• 재산면 게이트볼장 실시설계
	‘25년			• 재산면 게이트볼장 공사 발주 및 완료
	‘26년~			• 해당없음
문 제 점 (주민의견)	◦ 해당없음
개선방안	◦ 해당없음
비 고	◦ 생활체육공원 조성사업과 연계하여 게이트볼장을 추가 조성

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24. 6.까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업진행율	목 표(A)	100%	10%	60%	80%	100%	-
	실 적(B)	70%	10%	60%	70%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100			100%	100%	87%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ 2022. 07. : 민선8기 공약사업 선정(노인체육시설 확충)

◦ 2022. 09. : 사업대상지 수요조사

◦ 2023. 01. : 사업대상지 현장점검, 사업대상지 1개소 선정(상운면 가곡리)

◦ 2023. 04. : 상운면 게이트볼장 조성사업 예산 편성

◦ 2023. 08. : 상운면 게이트볼장 공사 착공 ※10월 완공

◦ 2024. 03. : 재산면 생활체육공원(게이트볼장) 실시설계 ※12월 완료 예정

◦ 2025. 03. : 재산면 생활체육공원(게이트볼장) 발주

◦ 2025. 09. : 재산면 생활체육공원(게이트볼장) 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-
2024년	300	-	-	300	-	300	-	-	300	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	400	0	0	400	0	400	0	0	400	0