공약사업 실천계획서

3-2-2			소천면 농업인 생활체육공원 조성사업
체육시설사업소
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	■단기 □중기 □장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	3,700백만원				추진상황 (이행률)	추진중(20%)
추진부서	체육시설사업소 체육진흥팀 (담당자 전혜정 ☎ 6977)				협조부서	기획감사실
공약목표	소천면 농업인 생활체육공원 조성을 통한 면민들의 체육환경 개선
사업개요	사업위치			소천면 현동리 608-2 일원
	사업기간			2022. 07 ~ 2026. 06.
	사 업 량			생활체육공원 조성 1식
	사업내용			다목적운동장(인조잔디구장, 육상트랙), 야외운동기구, 휴게시설 등
추진계획	~‘22년			• 사업대상지 조사
	‘23년			• 투자심사 완료, 사업대상지 변경(소천면→재산면)
	‘24년			• 부지매입 완료, 도비(균특전환) 예산 요구
	‘25년			• 소규모환경영향평가, 실시설계
	‘26년~			• 공사 착공
문 제 점 (주민의견)	◦ 사업부지 중 농업보호구역에 대한 농지전용협의(경상북도) 필요
개선방안	◦ 관련 법령 검토 및 신속한 업무협의를 추진하여 적기에 사업이 완료될 수 있도록 하겠음
비 고

공약사업 관리카드

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24. 6.까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업진행율	목 표(A)	100%	10%	15%	25%	60%	100%
	실 적(B)	25%	10%	15%	20%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100			100%	100%	80%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ 2023. 03. : 공유재산심의 및 투자심사(자체) 완료

◦ 2023. 12. : 사업대상지 변경(기존 부지 소유자 매도 의사 철회)

◦ 2024. 03. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

◦ 2024. 04. : 부지매입 완료, 체육진흥시설지원 전환사업 예산요구서 제출

◦ 2024. 05. : 경북도청 방문(예산확보 실무협의)

◦ 2025. 02. : 소규모 환경영향평가 발주

◦ 2025. 07. : 실시설계 발주

◦ 2026. 03. : 실시설계 완료 및 사전 행정절차 이행

◦ 2026. 06. : 공사 착공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	700	-	-	700	-	700	-	-	700	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025년	1,350	-	400	950	-	-	-	-	-	-
2026년	1,650	-	500	1150	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	3,700	0	900	2,800	0	700	0	0	700	0

□ 재원 조달방안

◦ `25년 도비(균특전환) 예산 요구 및 확보 추진