공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

3-2-3			명호면 생활체육공원 조성사업
체육시설사업소
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	■단기 □중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	3,740백만원				추진상황 (이행률)	추진중(30%)
추진부서	체육시설사업소 체육진흥팀 (담당자 전혜정 ☎ 6977)				협조부서	기획감사실
공약목표	명호면 생활체육공원 조성을 통한 면민들의 체육환경 개선
사업개요	사업위치			명호면 도천리 276 일원
	사업기간			2022. 07. ~ 2025. 12.
	사 업 량			생활체육공원 조성 1식
	사업내용			다목적운동장(인조잔디구장, 육상트랙), 야외운동기구, 휴게시설 등
추진계획	~‘22년			• 사업대상지 조사
	‘23년			• 부지매입 및 도비(균특전환) 예산 확보
	‘24년			• 실시설계
	‘25년			• 공사 착공 및 준공
	‘26년~			• 해당없음
문 제 점 (주민의견)	◦ 특이사항없음
개선방안
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업진행율	목 표(A)	100%	10%	20%	40%	100%	-
	실 적(B)	40%	10%	20%	30%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100			100%	100%	75%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ 2022. 09. : 사업대상지 읍․면 수요조사 실시

◦ 2023. 03. : 도비(균특전환) 예산 요구

◦ 2023. 05. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행

◦ 2023. 06. : 부지 매입 완료

◦ 2023. 10. : 도비(균특전환)예산 확정

◦ 2024. 03. : 실시설계 용역 ※12월 완료 예정

◦ 2024. 04. : 주민설명회 개최(명호면 주민자치위원회)

◦ 2025. 04. ~ 2025. 12. : 공사 발주 및 완료

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	740	-	-	740	-	740	-	-	740	-
2024년	1,200	-	360	840	-	1,200	-	360	840	-
2025년	1,800	-	450	1,350	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	3,740	0	810	2,930	0	1,940	0	360	1,580	0