공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 1 - 2			전통시장인프라확층
새마을경제과
사업구분	■신규사업 ■계속사업				사업주체	■국가 ■도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	5,019백만원				추진상황 (이행률)	추진중(80%)
추진부서	새마을경제과 새마을경제팀 (담당자 권영임 ☎ 6252)				협조부서
공약목표	전통시장 인프라 확충을 위한 공약사업 이행(‘25. 12. 완료 후 계속추진)
사업개요	사업위치			봉화군 일원
	사업기간			2022. 7. ~ 2024. 12.
	사 업 량			전통시장 주차환경개선사업 외 2식
	사업내용			봉화상설시장 주차타워건립, 봉화내성시장 특성화시장육성사업, 봉화상설시장 노후시설개보수사업
추진계획	~‘22년			• 봉화내성시장 특성화시장육성사업 완료(12월)
	‘23년			• 봉화상설시장 노후시설개보수사업 완료(10월)
	‘24년			• 봉화상설시장 주차타워 추진(실시설계 및 건축허가 등)
	‘25년			• 봉화상설시장 주차타워 추진 및 완료(‘25. 12. 준공예정)
	‘26년~
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘22년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
사업완료 여부	목 표(A)	3건	1건	1건	1건	1건
	실 적(B)	2건	1건	1건	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		75%	100%	100%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 07. : 도비보조사업 신청(전통시장노후시설개보수사업)

◦ ’22. 11. : 도비보조사업 보조 확정(전통시장노후시설개보수사업)

◦ ’22. 12. : 봉화내성시장 특성화시장육성사업 완료

◦ ’23. 10. : 봉화상설시장 노후시설개보수사업 완료

◦ ’24. 1.~12. : 봉화상설시장 주차타워건립 실시설계 및 건축허가 등

◦ ’25. 1.~12. : 봉화상설시장 주차타워건립 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	428	160	49	219	-	428	160	49	219	-
2023년	2,233	1,299	20	914	-	2,233	1,299	20	914	-
2024년	2,358	1,415	-	943	-	2,358	1,415	-	943	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	5,019	2,874	69	2,076	0	5,019	2,874	69	2,076	0

□ 재원 조달방안

◦ 국·도비 보조사업으로 예산편성 시, 군비 부담 분 확보