공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4- 2 - 1			915지방도(예고개~백두대간 수목원) 확포장
건설교통과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 ■도 □군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	70,200백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(30%)
추진부서	건설교통과 도로팀 (담당자 이명진 ☎ 6482)				협조부서
공약목표	제5차 경상북도 도로건설 관리계획(2026~2030)반영
사업개요	사업위치			영주시 평은면 오운리 ~ 춘양면 서벽리
	사업기간			2019. ~ 2030.(12개년)
	사 업 량			L=45.4km
	사업내용			도로개량 및 정비 L=45.4km, 터널 1개소
추진계획	~‘22년			• 주실령터널 건설공사 기본및실시설계 착수
	‘23년
	‘24년			• 기본및실시설계 완료 및 인허가 추진 • 사업착공, 편입토지 보상
	‘25년			• 사업추진
	‘26년~			• 사업추진
문 제 점 (주민의견)	제5차 경상북도 도로건설 관리계획 반영(2026~2030) 노력
개선방안	경상북도 의견(국지도 승격 우선 검토 후 선형개량 검토)에 따라 국지도 승격이 될 수 있도록 지속 건의
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 9월까지)	연도별 목표(백만원)
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
예산확보	목 표(A)	1,000	1,000	-	5,000	5,000	59,200
	실 적(B)	1,000	1,000	-	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	-	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’20. 03. : ‘제4차 경상북도 도로건설 관리계획(2021∼2025) 반영 건의

◦ ’20. 09. : 도지사님 사업 건의

(제4차 도로건설 관리계획(2021∼2025) 반영 및 국지도 승격 건의)

◦ ’22. 01  : 주실령터널 건설공사 기본 및 실시설계용역 착수(경상북도)

◦ ’24. 02.  : 기본 및 실시설계용역 완료

◦ ’24. 04. : 분할측량 및 편입토지 보상 추진(토지보상 80% 완료 시 착공)

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-
2025년	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-
2026년~	59,200	-	59,200	-	-	59,200	-	59,200	-	-
임기후
합 계	70,200	0	70,200	0	0	70,200	0	70,200	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 제5차 경상북도 도로건설 반영이 목표이며 계획 반영 될 경우 중기계획에

의거 예산확보 가능