공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4- 2 - 2			918지방도(영양~재산~명호~봉성) 확포장
건설교통과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 ■도 □군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	71,200백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(30%)
추진부서	건설교통과 도로팀 (담당자 이명진 ☎ 6482)				협조부서
공약목표	제5차 경상북도 도로건설 관리계획(2026~2030)반영
사업개요	사업위치			봉화군 봉화읍 유곡리 ~ 재산면 남면리 일원
	사업기간			2019. ~ 2030.(12개년)
	사 업 량			L=37.2km
	사업내용			도로개량 및 정비 L=37.2km
추진계획	~‘22년			• 명호도로 선형개량공사 착공(L=0.56km/명호면 고감리)
	‘23년			• 명호도로→ 사업추진, 편입토지 보상 • 양곡도로→ 실시설계용역 추진
	‘24년			• 명호도로→ 사업준공 • 양곡도로→ 사업추진, 편입토지 보상
	‘24년~			• 제5차 경상북도 도로건설 반영요구
문 제 점 (주민의견)	경상북도 의견(국지도 승격 우선 검토 후 선형개량 검토)
개선방안	국지도 승격이 될 수 있도록 지속 건의
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 9월까지)	연도별 목표(백만원)
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
예산확보	목 표(A)	1,000	1,000	2,950	400		66,850
	실 적(B)	1,000	1,000	3,308	700	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	114%	175%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’20. 03. : ‘제4차 경상북도 도로건설 관리계획(2021∼2025) 반영 건의

◦ ’20. 10. : 국회의원 사업 건의

(명호면 도천리/위험구간 도로선형개량 및 정비 L=0.56km)

◦ ’22. 07  : 명호도로 선형개량공사 사업 착공

◦ ’23. 04  : 양곡도로 위험도로 구조개선공사 실시설계용역 착수

◦ ’23. 10  : 양곡도로 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최

◦ ’23. 11  : 지반조사 완료 및 주민의견 설계반영

◦ ’23. 12  : 소규모재해영향평가 착수 및 분할측량 의뢰

◦ ’24. 02  : 보상협의 착수

◦ ’24. 04  : 소규모재해영향평가 협의·심의, 실시설계용역 완료

◦ ’24. 05  : 양곡도로 위험도로 공사 발주(예정)

◦ ’24. 07  : 명호도로 선형개량 공사 준공(예정)

◦ ’25. 12  : 양곡도로 위험도로공사 준공 및 개통(예정)

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-
2023년	2,950	-	2,950	-	-	2,950	-	3,308	-	-
2024년	400	-	400	-	-	400	-	700	-	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년~	66,850	-	66,850	-	-	66,850	-	66,192	-	-
임기후
합 계	71,200	0	71,200	0	0	71,200	0	71,200	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 제5차 경상북도 도로건설 반영이 목표이며 계획 반영 될 경우 중기계획에

의거 예산확보 가능