공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4- 2 - 7			산간 농촌 도로 확포장공사
건설교통과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	■단기 □중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	450백만원				추진상황 (이행률)	추진 중(40%)
추진부서	건설교통과 도로팀 (담당자 권기헌 ☎ 6483)				협조부서
공약목표	확포장공사 완료
사업개요	사업위치			봉화군 재산면 동면리 일원(속지명 : 햇골)
	사업기간			2023. ~ 2025.(3개년)
	사 업 량			L=1.5km
	사업내용			도로개설 L=1.5km, B=4.0(3.0)m
추진계획	~‘22년			• 실시설계 착수
	‘23년			• 실시설계 완료 및 편입토지 보상
	‘24년			• 사업착공
	‘25년			• 사업완료
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23. 9월까지)	연도별 목표(백만원)
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
예산확보	목 표(A)	30	30	80	150	190	-
	실 적(B)	30	30	80	150	190	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	100%	100%	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 09. : 실시설계용역 착수

◦ ’23. 03.  : 기공승낙서 징구 및 산림청 소유필지 협의

◦ ’23. 09. : 보상금 사정 통보

◦ ’24. 03.  : 사업착공(1차)

◦ ’24. 12.  : 사업준공(1차)

◦ ’25. 05.  : 사업착공(2차)

◦ ’25. 12.  : 사업준공예정(2차)

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	30	-	-	30	-	30	-	-	30	-
2023년	80	-	-	80	-	80		-	80	-
2024년	150	-	-	150	-	150	-	-	150	-
2025년	190	-	-	190	-	190	-	-	190	-
2026년~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후
합 계	450	0	0	450	0	450	0	0	450	0

□ 재원 조달방안

◦25년도 1회추경으로 예산확보 가능