공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 -3 - 1			내성지구 도시개발사업 조기 추진
도시계획과
사업구분	□신규사업 ■계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	272억원				추진상황 (이행률)	2단계 사전 행정절차 중 (60%)
추진부서	도시교통과 도시개발팀 (담당자 윤창용 ☎ 6422)				협조부서
공약목표	내성지구 도시개발사업 조기 추진
사업개요	사업위치			봉화군 봉화읍 내성리 산49-1번지 일원
	사업기간			2019. ~ 2027.
	사 업 량			부지조성 A=86,304㎡
	사업내용			1단계 : 군계획시설사업 A=38,926㎡(경찰서 부지조성, 진입도로 등) 2단계 : 도시개발사업 A=47,378㎡(공공기관, 주거지역 등)
추진계획	~‘22년			• 1단계 편입토지 토지 수용재결 • 1단계 봉화 군계획시설(도로, 공공청사) 부지조성 공사발주
	‘23년			• 1단계 공사 착공 • 2단계 내성지구 도시개발구역 지정 추진
	‘24년			• 1단계 공사 추진중(진도율 75%) • 2단계 도시개발 사업구역 지정 고시 및 소규모환경영향평가 협의 완료
	‘25년			• 1단계 공사완료(25년4월 말) • 2단계 편입토지 수용재결 추진
	‘26년~			• 2단계 공사 착공(27년 12월 준공예정)
문 제 점 (주민의견)	• 해당없음
개선방안	• 해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
공정율	목 표(A)	50%	20%	50%	60%	70%	100%
	실 적(B)	50%	20%	50%	60%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	100%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’19. 12. : 1단계 개발부지 군계획시설(도로, 공공공지, 공공청사) 입안

◦ ’20.  8. : 1단계 실시설계용역 착수 및 기본조사 측량 실시

◦ ’21.  7. : 1단계 소규모환경영향평가 협의완료

◦ ’22.  1. : 1단계 사업인정 및 실시계획인가 고시(봉화군 고시 2022-6호)

◦ ’22. 12. : 1단계 공사 총괄계약

◦ ’23.  2. : 1단계 수용재결 완료
◦ ’23.  5. : 1단계 공사 및 건설사업관리용역 착공

◦ ’23. 12. : 2단계 도시개발사업 지구·지정 요청서 경상북도 제출

◦ ’24.  1. : 2단계 도시개발사업 지구·지정 관련부서 협의

◦ ’24.  2. : 2단계 도시개발사업 경상북도 경관심의회 심의

◦ ’24.  4. : 2단계 실시설계용역 착수

◦ ’24.  7. : 2단계 도시개발사업 경상북도 도시계획위원회 심의

◦ ’24.  8. : 2단계 도시개발사업 지구·지정 완료

◦ ’24. 12. : 2단계 소규모 환경영향평가 협의 완료 및 사업시행자 지정 고시

◦ ’25.  4. : 1단계 공사준공

◦ ’25.  6. : 2단계 실시계획인가 고시

◦ ’25. 12. : 2단계 수용재결 완료

◦ ’26.  1. : 2단계 사업발주

◦ ’27. 12. : 2단계 공사준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	750	-	-	750	-	500	-	-	500	-
2022년	3,000	-	-	3,000	-	1,500	-	-	1,500	-
2023년	5,000	-	-	5,000	-	4,600	-	-	4,600	-
2024년	6,150	-	-	6,150	-	2,700	-	-	2,700	-
2025년	6,150	-	-	6,150	-	3,000	-	-	3,000	-
2026년	6,150	-	-	6,150	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	27,200	-	-	27,200	-	12,300	-	-	12,300	-

□ 재원 조달방안

◦ 자체재원 마련