공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 3 - 2			경북형 농촌재생뉴딜사업 (봉화군 농촌공간정비사업)
농촌활력과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	1,000백만원				추진상황 (이행률)	완료(100%)
추진부서	농촌활력과 농촌개발팀 (담당자 김제성 ☎ 6843)				협조부서	-
공약목표	• 농촌공간계획 기반하여 농촌 공간 재구조화에 필요한 정비대상 시설의 정비 및 정주환경개선 사업을 통한 농촌공간의 재생을 도모
사업개요	사업위치			봉화군 봉화읍 문단1리 1290-1번지 일원
	사업기간			2022. 12. ~ 2024. 12.
	사 업 량			•부지정지: 11,916.8㎡(군유지 4,928.8㎡, 사유지 6,988㎡) •건축철거: 계사 및 건조장 등 7동 2,807㎡
	사업내용			•부지매입(사유지 6,988㎡) 및 폐축사 철거(7동) •공간조성(3,180㎡): 건강산책로, 생활체육공간, 다목적광장
추진계획	‘22년			• 경북형 농촌재생뉴딜사업(소규모 사업) 신청 및 선정
	‘23년			• 기본 및 실시설계 용역 추진
	‘24년			• 부지 보상, 공사 착공 및 준공
	‘25년
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘25년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
추진율	목 표(A)	100%	5%	50%	100%	-	-
	실 적(B)	100%	5%	50%	100%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	100%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 08. : 사업대상지 발굴

◦ ’22. 11. : 경북형 농촌재생뉴딜(소규모 농촌공간정비)사업 신청

◦ ’22. 12. : 경북형 농촌재생뉴딜(소규모 농촌공간정비)사업 선정

◦ ’23. 04. : 기본 및 실시설계용역 추진

◦ ’24. 06. : 기본 및 시행계획 승인(경상북도)

◦ ’24. 08. ~ 12.  : 공사 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	100	-	30	70	-	100	-	30	70	-
2023년	250	-	75	175	-	250	-	75	175	-
2024년	650	-	75	575	-	650	-	75	575	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	1,000	0	180	820	0	1,000	0	180	820	0

□ 재원 조달방안

◦ 공모사업 선정에 따른 군비(부지매입비) 확보