공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 3 - 3			석포면 기초생활거점조성
농촌활력과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	7,300백만원				추진상황 (이행률)	추진중(60%)
추진부서	농촌활력과 농촌개발팀 (담당자 이한솔 ☎ 6842)				협조부서	-
공약목표	• 노후화된 면사무소를 행정돌봄복지시설의 복합센터로 조성 • 주민 친화적 공간 및 돌봄 커뮤니티센터 조성
사업개요	사업위치			봉화군 석포면 석포리 일원
	사업기간			2022. 01. ~ 2026. 12.
	사 업 량			신축 1동, 주변환경 정비 등
	사업내용			행정돌봄복합센터(면사무소, 거점센터 복합화)조성 및 지역역량강화사업 등
추진계획	~‘22년			• 농촌협약 체결 • 기본계획 착수
	‘23년			• 기본계획 승인 및 공공건축 기본계획 사전검토
	‘24년			• 시행계획 및 실시설계 수립
	‘25년			• 사업(공사) 착수
	‘26년~			• 사업 준공
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고	농촌협약체결 시군은 기초생활거점조성사업 개별 공모사업 신청이 불가하여 공약 사업 대상지를 상운면에서 석포면으로 변경하고자 함.

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘25년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
추진율	목 표(A)	70%	5%	30%	50%	70%	100%
	실 적(B)	55%	5%	30%	50%	5%	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		70%	100%	100%	100%	5%	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22. 07. : 농촌협약 체결

◦ ’22. 09. : 기본계획 착수

◦ ’23. 10. : 기본계획 승인 협의 및 공공건축 기본계획 사전검토

◦ ’24. 06. : 공공건축 사전검토 및 건축 심의

◦ ’25. 03. : 시행계획 승인

◦ ’25. 04. ~ ’26. 12. : 사업(공사) 착공 및 준공

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	311	218	22	71	-	311	218	22	71	-
2023년	586	410	41	135	-	586	410	41	135	-
2024년	3,120	1,134	113	1,873	-	1,370	959	95.9	315.1	-
2025년	3,004	843	84	2,077	-	-	-	-	-	-
2026년	279	195	20	64	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	7,300	2,800	280	4,220	0	2,267	1,587	158.9	521.1	0

□ 재원 조달방안

◦ 농촌협약 체결에 따른 국도비 확보 및 자체재원 마련