공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 3 - 5			민간아파트 유치 건설 추진
도시계획과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 ■기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	826억원				추진상황 (이행률)	농업용수로 개체공사중(20%)
추진부서	도시교통과 주택팀 (담당자 이윤경 ☎ 6151)				협조부서	재정과 재산관리팀 (담당자 임혜정 ☎ 6561)
공약목표	민간아파트 유치 건설로 인구 증대
사업개요	사업위치			봉화읍 내성리 354-1번지 일원(구 워터파크부지)
	사업기간			2022. 7. ~ 2029. 12.
	사 업 량			18층 210세대 정도
	사업내용			군유지를 매각하여 민간아파트 유치 건설
추진계획	~‘22년			LH 토지주택공사, 경상북도개발공사 등 협의
	‘23년			대구도시개발공사 등 협의
	‘24년			비위생매립지정비사업 준공(녹색환경과) 공유재산 심의 및 관리계획 의회 의결(재정과)
	‘25년			농업용수로 개체공사(농업기반조성팀) 및 군유지매각(6,325㎡, 재정과 재산관리팀) 추진
	‘26년			군관리계획 변경 및 주택건설사업계획 신청
	‘27년			주택건설사업계획 승인 및 공사착공
	‘29년~			공사준공 및 입주
문 제 점 (주민의견)	아파트 준공 시 진출입 차량으로 인한 교통장애 우려 대책 필요 군유지 매각 공고시 사업성 저하로 입찰 미참여 우려
개선방안	아파트 시공업체의 원활한 교통 흐름에 대한 대처방안 필요
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
추진률	목 표(A)	35%	-	25%	35%	65%	80%
	실 적(B)	15%	-	10%	15%	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		43%	-	40%	43%	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’24. 02. : 비위생매립지정비사업 국도비(1,527백만원) 확보(녹색환경과) 및 시행

◦ ’24. 04. : 군유지 매각(재정과) 및 민간아파트 건설 업무협의

◦ ’24. 12. : 비위생매립지정비사업(녹색환경과) 완료

◦ ’24. 12. : 대체 구거 공사 시행(농업기반조성팀)

◦ ’25. 06. : 대체 구거 공사 완료 예정(농업기반조성팀)

◦ ’25. 07. : 매각계획 수립 및 감정평가 완료 예정(재정과)

◦ ’26. 06. : 국관리계획 결정(변경) 및 주택건설사업계획 신청 예정

◦ ’27. 06.  : 공사착공

◦ ’29. 12. : 공사준공 및 입주

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	2,350	1,175	352	823	-	2,350	1,175	352	823	-
2025년	200	-	-	200	-	200	-	-	200	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
합 계	82,550	1,175	352	1,023	80,000	2,550	1,175	352	1,023	-

□ 재원 조달방안

◦ 해당없음