공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 3 - 6			상수도 취수원 이설(석포면)
녹색환경과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	80억원				추진상황 (이행률)	추진중(20%)
추진부서	녹색환경과 상수도팀 (담당자 박태훈 ☎ 6443)				협조부서
공약목표	상수도 취수원 이설(석포면)
사업개요	사업위치			봉화군 석포면 석포리 일원
	사업기간			2022. ~ 2030.(9년)
	사 업 량			상수관로 L=10㎞, 취수장 1개소
	사업내용			상수도 취수원 이설
추진계획	~‘22년			• 수도정비 기본계획 변경용역 착수
	‘23년			• 취수원 이전 타당성 검토
	‘24년			• 봉화군 수도정비기본계획 승인 협의[환경부]
	‘25년			• 기본 및 실시설계용역 추진[환경부 협의 완료(가능)시]
	‘26년~			• 사업 발주[환경부 협의 완료(가능)시]
문 제 점 (주민의견)	취수원 이전 근거에 대한 타당성 미흡 시 환경부 협의에 어려움이 따르고, 상수원 보호구역 변경 지정에 따른 민원 발생 가능
개선방안	환경부 보조 재원 확보를 위한 기본계획 반영 협의에 어려움이 따를 경우, 자체 재원 활용 조건으로 기본계획 반영 검토 협의 추진 검토
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
검토	목 표(A)	기본계획수립	기본계획착수	기본계획 수립	기본계획 승인	설계	착공
	실 적(B)	기본계획수립	기본계획착수	기본계획수립	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22.  7. : 수도정비 기본계획 변경용역 착수

◦ ’24. 10. : 취수원 이전 타당성 검토 용역 완료

◦ ’24. 12. : 봉화군 수도정비기본계획 반영 협의

◦ ’25.  1. : 기본 및 실시설계용역 추진

◦ ’26. ~   : 사업 발주

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025년	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
2026년	2,500	1,500	450	550	-	-	-	-	-	-
임기후	5,000	2,500	750	1,750	-	-	-	-	-	-
합 계	8,000	4,000	1,200	2,800	0	0	0	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 수도정비기본계획 반영 후 연차적 예산 확보 및 사업 추진