공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 3 - 7			운곡천 취수장 및 정수장 설치(명호면)
녹색환경과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	58억원				추진상황 (이행률)	추진중(20%)
추진부서	녹색환경과 상수도팀 (담당자 강다솜 ☎ 6442)				협조부서
공약목표	운곡천 취수장 및 정수장 설치(명호면)
사업개요	사업위치			봉화군 봉성면 봉성리~ 명호면 도천리 일원
	사업기간			2022. ~ 2027.(6년간)
	사 업 량			상수관로 매설 L=9.7km
	사업내용			명호면 지방상수도 공급을 위한 체계 구축
추진계획	~‘22년			• 수도정비 기본계획 변경용역 착수
	‘23년			• 봉화군 수도정비기본계획 초안 협의[경상북도, 환경부] - 명호면 급수구역 분리 검토
	‘24년			• 봉화군 수도정비기본계획 초안 승인 [급수구역 조정] - 봉성~명호간 상수관로 확장 추진을 위한 급수구역 조정 • 봉성~명호간 상수관로 확장사업 기본 및 실시설계용역 추진
	‘25년			• 봉성~명호간 상수관로 확장사업 착수
	‘27년			• 봉성~명호간 상수관로 확장사업 완료
문 제 점 (주민의견)	현재 수도정비기본계획 미반영 사업으로 전환사업비 신청에 어려움이 있음
개선방안	봉화정수장 증설을 통해 발생되는 여유 정수량을 봉성~명호간 상수관로 확장사업 추진을 통해 명호면 지역에 공급하고자 함
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
검토	목 표(A)	기본계획수립	기본계획착수	기본계획 수립	기본계획 초안 승인, 실시설계	착공	준공
	실 적(B)	기본계획수립	기본계획착수	기본계획수립	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22.  7. : 수도정비 기본계획 변경용역 착수

◦ ’23. 12. : 기본계획 초안 협의[경상북도 및 환경부]

- 명호면 급수구역 분리 검토

◦ ’24.  4. : 봉성~명호간 상수관로 확장사업 기본 및 실시설계용역 착수

◦ ’24.  12. : 봉화군 수도정비기본계획 초안 승인 [급수구역 조정]

- 봉성~명호간 상수관로 확장 추진을 위한 급수구역 조정

◦ ’25.  7. : 봉성~명호간 상수관로 확장사업 추진

◦ ’27. 12. : 봉성~명호간 상수관로 확장사업 완료

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-
2025년	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
2026년	3,000	-	2,100	900	-	-	-	-	-	-
임기후	1,500	-	1,050	450
합 계	5,850	0	3,150	2,700	0	0	0	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 수도정비기본계획 반영 후 연차적 예산 확보 및 사업 추진