공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

4 - 3 - 8			관내 상수도 공급 확충 사업(명호면)
녹색환경과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 □중기 ■장기				완료시기	□임기내 ■임기후
총사업비	80억원				추진상황 (이행률)	추진중(20%)
추진부서	녹색환경과 상수도팀 (담당자 강다솜 ☎ 6442)				협조부서
공약목표	명호면 관내 상수도 공급
사업개요	사업위치			봉화군 명호면 도천리, 풍호리,고감리,양곡리 일원
	사업기간			2022. ~ 2028.(7년간)
	사 업 량			상수관로 L=13㎞, 가압장 5개소
	사업내용			명호면 관내 상수도 공급
추진계획	~‘22년			• 수도정비 기본계획 변경용역 착수
	‘23년			• 기본계획 초안 협의[경상북도 및 환경부]
	‘24년			• 봉화군 수도정비기본계획 초안 승인 [급수구역 조정] - 봉화급수구역 : 풍호리(2리), 고감리, 양곡리, 도천리(1,4리) - 재산급수구역 : 풍호리(1리), 고계리
	‘25년			• 명호 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역 추진(풍호, 고감, 양곡)
	‘26년~			• 명호 농어촌생활용수 개발사업 추진(‘28년 완료 예정)
문 제 점 (주민의견)	명호면 지역은 재산급수구역에 포함되어 있으나, 현재 재산정수장 여유 정수량 부족으로 명호지역에 안정적인 급수 공급을 위해서는 봉성~명호간 상수관로 확장공사(’27년 완료 계획) 추진이 선행되어야 함
개선방안	명호면 지역 조기 급수 추진을 위해 수도정비 기본계획 변경 시 급수구역 조정 후 ‘25년 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)으로 봉성~명호간 상수관로 확대를 추진 검토하겠음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘23년까지)	연도별 목표
			’22년	’23년	’24년	’25년	’26년~
검토	목 표(A)	기본계획수립	기본계획착수	기본계획 수립	기본계획 초안 승인	설계	착공
	실 적(B)	기본계획수립	기본계획착수	기본계획수립	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’22.  7. : 수도정비 기본계획 변경용역 착수

◦ ’23. 12. : 기본계획 초안 협의[경상북도 및 환경부]

◦ ’24.  12. : 봉화군 수도정비기본계획 초안 승인 [급수구역 조정]

- 봉화급수구역 : 풍호리(2리), 고감리, 양곡리, 도천리(1,4리)

- 재산급수구역 : 풍호리(1리), 고계리

◦ ’25.  4. : 명호 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역 추진

◦ ’26.  1. : 명호 농어촌생활용수 개발사업 추진(‘28년 완료 예정)

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025년	350	-	-	350	-	-	-	-	-	-
2026년	1,000	-	700	300	-	-	-	-	-	-
임기후	6,650		4,900	1,750
합 계	8,000	0	5,600	2,400	0	0	0	0	0	0

□ 재원 조달방안

◦ 수도정비기본계획 반영 후 연차적 예산 확보 및 사업 추진