공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

2 - 1 - 3			향기식물 치유단지조성
산림소득자원과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	270백만원				추진상황 (이행률)	추진중(70%)
추진부서	산림소득자원과 조경녹지팀 (담당자 변현우 ☎ 6262)				협조부서
공약목표	문수산 산림복지단지와 국립백두대간수목원을 연계하는 향기식물 치유단지 조성
사업개요	사업위치			문수산 산림복지단지, 외씨버선길(춘양목 솔향기길)
	사업기간			2023. ~ 2025.
	사 업 량			향기식물 치유단지 20,000㎡ 조성
	사업내용			문수산 산림복지단지 및 춘양목 솔향기길 주변 향기식물 식재
추진계획	~‘22년			• 공약사항 추진을 위한 기본구상 용역비 예산편성 요청
	‘23년			• 기본구상 및 실시설계 용역 추진
	‘24년			• 1차사업 추진완료
	‘25년~			• 2차사업 추진 및 사후관리
문 제 점 (주민의견)	조성예정지 중 일부가 국유림 소관으로 사용허가를 위한 협의 필요, 협의가 어려울 경우 문수산 산림복지단지 일원에 조성
개선방안	영주국유림관리소, 백두대간수목원에 협조 요청
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년부터)	연도별 목표
			’23년	’24년	’25년	’26년	’27년~
추진계획 달성여부	목 표(A)	예산편성요청	기본구상 실시설계	1차사업 완료	2차사업 완료	사후관리	사후관리
	실 적(B)	예산편성완료	기본구상 실시설계	1차사업 완료	-	-	-
연도별 달성률(%) (B/A)*100		100%	100%	100%	-	-	-

□ 추진경과 및 계획

◦ ’23. 5. : 향기식물 치유단지 조성계획 수립

◦ ’23. 8. ~ 11. : 백두대간수목원 컨설팅 및 실시설계

◦ ’24. 5. : 추경예산 편성

◦ ’24. 5. ~ 11. : 1차 사업 추진 완료

◦ ’25. 1. ~ : 2차 사업 추진 및 사후관리

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-
2024년	150	-	-	150	-	150	-	-	150	-
2025년	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	270	0	0	270	0	270	0	0	270	0

□ 재원 조달방안

◦ 군비예산 270백만원 확보완료