공약사업 실천계획서

공약사업 관리카드

2 - 2 - 2			휴양형 산림숙박시설 개발
산림소득자원과
사업구분	■신규사업 □계속사업				사업주체	□국가 □도 ■군 □기타
사업기간	□단기 ■중기 □장기				완료시기	■임기내 □임기후
총사업비	7억원				추진상황 (이행률)	추진중(70%)
추진부서	산림소득자원과 산림휴양팀 (담당자 박정균 ☎ 6268)				협조부서
공약목표	문수산 산림복지단지 내 휴양형 산림숙박시설(트리하우스) 시범조성‧운영 후 확대조성 검토
사업개요	사업위치			봉성면 우곡리 산48-1번지 일원(문수산 산림복지단지 일원)
	사업기간			2023. ~ 2025.(3년)
	사 업 량			트리하우스 2개소
	사업내용			문수산 산림복지단지 일원에 휴양형 산림숙박시설(트리하우스) 조성
추진계획	‘23년 9.			• 사업계획 수립 및 예산편성(군비)
	‘24년 1.			• 실시설계 용역 시행
	‘24년 6.			• 각종 인‧허가 협의
	‘24년 12.			• 공사 발주 및 착공
	‘25년 7.			• 공사 준공 및 시범운영
문 제 점 (주민의견)	해당없음
개선방안	해당없음
비 고

’24. 12월말 기준

공약사업 이행 현황

□ 공약 확인지표 및 이행실적

확인지표	구 분	실적 (‘24년까지)	연도별 목표
			’23년	’24년	’24년	’24년	’25년~
트리하우스 현황	목 표(A)	공사준공	사업계획수립 및 예산편성	실시설계	인‧허가 협의	공사착공	공사준공
	실 적(B)	공사착공	사업계획수립 및 예산편성 요구	실시설계 용역 완료	인·허가협의 완료	공사착공완료	공사 추진중
연도별 달성률(%) (B/A)*100		70%	100%	100%	100%	100%	20%

□ 추진경과 및 계획

◦ ’23. 09. : 사업계획수립 및 예산편성 요구

◦ ’24. 01. : 실시설계 용역 시행

◦ ’24. 10. : 각종 인‧허가 협의 추진

◦ ’24. 12. : 공사 발주 및 착공

◦ ’25. 7. : 공사 준공 및 시범운영

□ 재원 투자계획 및 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

구 분	재원 투자계획					예산 확보현황
	합계	국비	도비	군비	기타	합계	국비	도비	군비	기타
임기전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024년	700	-	-	700	-	-	-	-	700	-
2025년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후	-	-	-	-
합 계	700	0	0	700	0	0	0	0	700	0

□ 재원 조달방안

◦ 자체재원