2. 사업계획서

사 업 계 획 서

1. 사업명 : 고티재 선형개량공사

2. 위  치 : 경상북도 봉화군 명호면 고계리 ~ 재산면 상리 지내 (지방도 918호선)

3. 사업의 목적

본 공사는 봉화군 명호면 고계리 ~ 재산면 상리 지내 고티재 선형개량 공사로, 마을주민의 교통편의와 지방도의 안전을 위해 선형을 개선하고자 함.

4. 사업개요

□ 사 업 량 : 도로선형개량 B = 9.5m, L = 214m

□ 사 업 비 : 661,000천원

(도급 596,100천원, 관급 47,100천원, 폐기물 17,300천원, 보상비 500천원)

□ 공사기간 : 2014. 10.  ~ 2015. 10.

□ 시 행 청 : 경상북도 종합건설사업소 북부지소

5. 주요 구조물 설치계획

가. 도    로

1)선형개량 : B = 9.5m, L = 140m

나. 토    공  : 1) 흙깍기(토사)623㎥ (리핑암)1,198㎥ (발파암)2,694㎥

2) 터파기(토사)3㎥ (발파암)39㎥

3) 되메우기(다짐) 35㎥

다. 배 수 공 :  1) 종배수관(D450) L=142.5m, 2)집수정 15개소

3) L형측구 L=37.0m, 4)옹벽식측구(H=1.0) L=117.0m

5) 산마루측구 L=117.0m, 6)도수로설치 L=65.0m

라. 포 장 공 : 1) 아스콘포장(B=9.5) L=140.0m

바. 부 대 공 : 1식