	사람중심! 경북세상!

2019년 농어촌마을단위

LPG소형저장탱크 보급사업 수요조사

	경 상 북 도 [생활경제교통과]

2019년 LPG소형저장탱크 보급사업 수요조사

□ 농어촌마을에 도시가스수준의 LPG연료 공급으로 에너지복지 향상과 주민들의 난방비 부담 완화

추진배경

○ 농어촌마을에 LPG소형저장탱크와 배관망을 통한 가스공급 으로 도시가스 소외지역 주민의 에너지복지 지원 필요

○ ‘14년부터 국비사업이 추진되고 있으나, 사업참여 희망 마을 수요가 많아 ‘17년부터 도 자체사업 추진

* (국비사업) 광역자치단체 단위로 매년 2~3개 마을 배정(산업부)

(도 자체사업) ‘17년 10개 마을, ‘18년 17개 마을

○ 도의회 기획경제위원회의 도비지원 확대 요구(‘17.02.08)

사업개요

○ 사업대상 : 30~70세대 농어촌마을(도시가스 미공급지역)

○ ‘19년 사업규모(안) : 20마을(국비사업 2, 도비사업 18개)

* 국비사업 선정결과에 따라 도비사업이 조정될 수 있음

○ 사 업 비 : 60억원(국비 3, 도비 25.5, 시군비 25.5, 자부담 6)

○ 지원조건 : 사업(마을)별 3억원 기준(실제 사업비는 증가할 수 있음)

* 보조비율 : (국비사업) 국비 50%, 도비 20%, 시군비 20%, 자부담 10%

(도비사업) 도비 45%, 시군비 45%, 자부담 10%

* 사업비가 3억원을 초과할 경우, 시군비와 자부담 추가 부담

○ 사업내용 : LPG소형저장탱크․배관망 및 내관․보일러 설치

○ 지원근거 : 경상북도 농어촌LPG공급시설 지원 조례 제4조

마을단위 LPG배관망 지원사업 운영지침

○ 위탁기관 : 한국LPG배관망사업단

선정 기준

① 산업통상자원부 운영지침 부합(30~70세대)

② 국비지원사업 미선정 시군에 우선권 부여

③ 郡지역에 선순위 배정, 세대수가 많은 마을 우선(70세대 이내)

④ 도시가스 공급 가능성이 낮은 지역 우선

④ 저장탱크 부지 확보 및 주민 동의 여부(동의율 90%이상, 최소 30세대)

추진절차

수요조사		▸경상북도		‘18. 7. 4 ~
⇩
사업참여 희망 마을 조사 신청서 작성ㆍ제출		▸시군(읍면)		~ ‘18. 7. 31
⇩
사업대상 확정		▸경상북도		‘18. 10월
⇩
사업계획 수립 사업비 교부		▸경상북도		‘19. 1~2월
⇩
사업위탁 협약 체결		▸시군		‘19. 2월
⇩
주민설명회, 실시설계 등 사업시행		▸한국LPG배관망사업단		‘19. 3월~5월
⇩
사업준공 및 가스공급 개시		▸시군, 공급사업자		~ ‘19. 11월

시․군 협조사항

○ 사업참여 마을 수요조사 실시

- 사업내용 사전 설명 및 주민 동의서 작성(최소 30세대 이상)

* 동의서 작성시 저장탱크 설치 부지 명시 및 설명

○ 사업신청서 제출 : ‘18. 7. 31(화)까지

붙 임 : 수요조사서 서식(서식 1∼3) 1부.

서식 1		농어촌 마을단위 수요조사 총괄표

□ ㅇㅇ읍(면)

일련 번호 (순위)	읍면	마을명	주소	마을대표 (연락처)	세대수	탱크부지확보 (유/무)	주민동의
1				홍길동 (010-0000-0000)	50세대	유	00세대
2

서식 2		농어촌 마을단위 수요조사(마을별 작성)

□ 마을 개요

마을명		OO마을		담당자(지자체)		ㅇㅇㅇ (010-000-0000)
소재지		경북 OO군 OO면 OO리 OO번지외		마을대표		홍길동 (010-000-0000)
세대수		50세대		도로상태		예시:아스팔트/ 보도블럭/콘크리트 등
사용 연료 현황		취사 : (예시:LPG용기, 연탄 등) 난방 : 등유(0세대)․심야전기(0세대)․화목(0세대)․연탄(0세대)
마을 면적		㎡		저장탱크 설치부지	부지확보 여부
					확 보 ( ), 미확보( )
도시가스	공급계획		없음
					소유구분
					시군유지 ( ), 사유지 ( )
	배관과의 거리
					주소:
지자체 검토 내용		① ② ③

□ 도면(위성사진 대체가능)

: LPG소형저장탱크 설치 부지 표시

서식 3		주민동의서

□ 사업현황

○ 마 을 명 : ㅇㅇ마을 (대표 : ㅇㅇㅇ, 010-0000-0000)

○ 지원조건 : 사업(마을)별 3억원 기준(보조금 90%, 자부담 10%)

※ 총 사업비가 3억원으로 정해진 것은 아니며, 3억원을 기준으로 하여 도 보조금을          책정한다는 뜻임. 따라서 신청 세대수와 현장 여건에 따라 실제 사업비와 자부담비가          증가할 수 있음에 주의 바람.

※ 자부담(마을부담) 비용은 총 사업비의 10%임.

예) 2018년도 봉화군 봉성면 봉양1리 LPG 소형저장탱크 실제사업비 : 86세대,             502,370천원

○ 사업내용 : LPG저장탱크‧배관망 및 내관‧보일러 설치 등

○ 저장탱크 부지 : 00㎡ (시군유지/사유지, ㅇㅇ군 ㅇㅇ면 ㅇㅇ리 000)

□ 동의자 명단

연번	성명	주소	서명

□ 동의자 명단

연번	성명	주소	서명